남해안개발과장 김한기입니다.

새로운 하동, 더큰 하동건설과 갈사만 프로젝트의 성공을 위해 많은 관심과 지원을 해주시는 하동군의회 김봉학의장님과 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

의원님께서 질문하신 내용에 대하여 답변 드리겠습니다.

첫 번째 질문사항에 대한 답변입니다.

한신공영측에서 공사가 중단된 사유는 사업단의 주주회사인 안정개발 주식회사의

대외채권을 양도받은 금오산업에서 갈사산단 PF자금에 대한 압류로 인해서 인출 및 집행이 불가함에 따라 기성금이 미지급되어 발생하였습니다.

한신공영 미지급액에 대한 기성청구액에 대하여는 사업정상화를 통하여 정산 처리 후 금액을 확정하여 지급할 예정이고, 대체 시공사를 선정하여 연말까지 주주사 정리와 채무액 변제, 대우조선 부지 연장협의 등 정리절차와 재원확보 대책을 마련하여 금년 연말까지 사업정상화가 될 수 있도록 하겠습니다.

두 번째 사항에 대한 답변을 드리겠습니다.

대우조선 부지 인도기간은 2014년 12월말로 되어 있으나, 실무자 협의를 통해서 2015년 12월말까지 연장하기로 하였으며, 만약 연장 불가시에 지체상환금은 사업비의 5/1000로 기 PF자금으로 집행된 770억원과 계약금 110억원에 대한 1일 이자는 4,400만원으로 계산하고 있습니다.

지체상환금 부담은 우리군과 한신공영간 법률적 판단이 필요하므로 금후 답변 드리도록 하겠습니다.

세 번째 질문사항에 대한 답변입니다.

우리군 토지분양자금 조기상환된 495억원에 대하여 선납한 이자는 2015년 4월30일까지 정기적금을 해지하고, 원금 450억원을 대출 상환하여 이자는 15억정도 하동군에 세입조치 하겠습니다.

셋째 해양플랜트 연구소 부지 5만평 제공에 따른 지분권 배분 및 관리주체에 대하여 답변 드리겠습니다.

재단법인 설립 및 운영방안 강구를 위해 부산대학교에서 운영체계 설정 용역을 추진하였으나, 용역결과 재단법인 설립 운영시에 부산대학교에서 구축한 시험설비를 재단법인 명의로 이전이 불가하여 재단법인 설립은 불가하다는 용역결과가 나왔습니다.

이에 연구소 관리주체 등에 관해서는 부산대학교 산하 연구기관 또는 기타 방안 설정을 위해 경남도, 하동군, 부산대학교 등 관계기관과 협의 중에 있습니다.

군의 지분은 부산대학교의 협의를 통해서 중장기 수지전망에 따른 수익금으로 군의 지분을 확보할 수 있는 방안과 기타 인센티브 등을 확보할 계획입니다.

2014년도 하반기 중에 관계기관과 협의하여 관리주체 지분관계 등을 협의토록 하겠습니다.

네 번째 질문사항에 대하여 답변 드리겠습니다.

추진현황입니다.

2009년 11월24일 개발계획변경 및 실시계획을 승인을 받았고, 2011년 7월29일 제3차 공유수면 매립기본계획에 반영하였습니다.

2013년 4월1일 토지 등 보상계획 공고를 하였으며, 2013년 5월2일 미분양부지 매입확약 동의로 1,810억원의 PF자금을 확보하였습니다.

2013년 7월29일부터 사업추진을 위한 보상을 실시하고 있습니다.

2014년 5월29일 실시협약서를 체결하였습니다.

지금까지 토지보상은 총 1,241,000㎡중 962,000㎡인 약 88%를 보상 완료하였고, 분묘는 238기중 123기를 이장 완료하였습니다.

벌목자금은 면적대비 약 65%로 작업 진행 중에 있습니다.

대송산단의 문제점은 시공사간 지분율 협의 지연으로 인해 시공사를 확정하지 못하고 있는 실정입니다.

대책으로 조속한 지분율 조정으로 공사도급을 계약 체결하여 2014년 하반기에 본 공사 착공 및 투자의향 기업 등 지속적인 관리로 조기분양을 완료토록 하겠습니다.

이상으로 답변을 마치겠습니다.